罚款通知单
工程名称：华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程       
          编号：罚-22
 致：吐鲁番明嘉电力实业有限公司                                      
 事由：工程施工进度的问题 
 内容：
    你公司承包施工的华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程，如不按期完工，直接影响（多家）电站并网。
    你单位施工人员配备严重不足，材料供应缓慢，手续办理不及时，导致进度严重滞后，已发001#通知单、19#罚款单、20#罚款单、21#罚款单，督促你单位施工方增加人员，加快施工进度，但没有引起你公司足够重视。截止今日外线工程未完成，不具备并网条件。鉴于此情况，根据合同约定对你公司罚款50000元（伍万元整）。

建设单位（章）：

项目经理：

现场经理：

    日    期：     年   月   日     	
  项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：                                             
    日    期：     年   月   日	
注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。